OBRA: “Instalación del Sistema de detección de incendio” para el edificio de la Procuración General, Sito en la calle Uruguay 440/466

2.     PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

                                            INDICE

2.1.   DATOS DE LOS TRABAJOS

2.1.1    Objeto	
2.1.2    Presupuesto Oficial	
2.1.3    Régimen de Contratación	
2.1.4    Plazo    	
2.1.5    Tipo de obra	
2.1.6    Capacidad legal	
2.1.7    Capacidad de contratación	
2.1.8    Plazo de garantía	
2.1.9    Planos	
2.1.10  Planos de obra y conforme a obra	
2.1.11  Plan de trabajos	
2.1.12  Consultas y visita al lugar de la obra	
2.1.13  Oficina para la Inspección	
2.1.14  Obrador	
2.1.15  Cartel de obra	
2.1.16  Elementos existentes	
2.1.17  Energía eléctrica	
2.1.18  Fotografías	
2.1.19  Teléfonos y Vehículo	
2.1.20  Cuenta en Banco Ciudad de Buenos Aires	
2.1.21   Terminología	

2.2.      DE LA LICITACION

2.2.1    Recepción y apertura
2.2.2    Efectos de la presentación de la oferta
2.2.3    Garantías	
2.2.4    Mantenimiento de oferta	
2.2.5    Impuesto al Valor Agregado	
2.2.6    Capacidad de contratación	
2.2.7    Forma de presentar la documentación	
2.2.8    Fórmula de propuesta
2.2.9    Redeterminación de Precios      
2.2.10 Estructura de Ponderación de Insumos Principales	
2.2.11  Ampliación de la información	
2.2.12  Requisitos de la oferta	
2.2.13  Declaración de obras	 
2.2.14  Equipos      
2.2.15	Liquidez del Activo y exigibilidad del Pasivo	
2.2.16  Plan de trabajo	
2.2.17  Plan de inversiones	
2.2.18  Garantía para impugnaciones	
2.2.19  Representante Técnico y Representante en obra
2.2.20  Certificado Fiscal para contratar de la AFIP
2.2.21  Certificado de Deudores Alimentarios Morosos
2.2.22  Ayuda memoria presentación oferta
2.2.23  Empresas asociadas
2.2.24  Adjudicación	
2.2.25  Decisión de dejar sin efecto la licitación. Facultades de la administración
2.2.26  Copias de oferta	 
2.2.27  Firma del Contrato y Contrata
2.2.28  Documentos integrantes del Contrato	 

2.3.      DE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA

2.3.1    Orden de comienzo	
2.3.2    Plan de Trabajos e Inversiones	
2.3.3    Inspección de Obra
2.3.4    Representante Técnico	
2.3.5    Replanteo de las obras	
2.3.6    Equipo a utilizar por el Contratista
2.3.7    Elementos existentes	
2.3.8    Retiro de materiales, máquinas e implementos de trabajo	
2.3.9    Materiales	
2.3.10  Trabajos en horas extras	
2.3.11  Energía eléctrica	
2.3.12  Agua de construcción
2.3.13  Especificaciones técnicas tipo
2.3.14  Conexiones, desconexiones y traslados
2.3.15  Subcontrataciones
2.3.16  Notificaciones	
2.3.17  Personal obrero	
2.3.18  Libro de órdenes de servicios	
2.3.19  Libro de notas de pedido	
2.3.20  Seguros	
2.3.21  Perjuicios por incendios
2.3.22  Indemnización por caso fortuito o fuerza mayor
2.3.23  Obligaciones con cargo al Contratista	
2.3.24  Prórrogas
2.3.25  Multas por incumplimiento en término
2.3.26  Multas por incumplimiento órdenes de servicio
2.3.27  Medición de las obras
2.3.28  Certificados de obra	
2.3.29 Régimen de Acopio	
2.3.30  Retención sobre los certificados	
2.3.31  Sustitución del fondo de garantía y reparos	
2.3.32  Documentación que deberá acompañar a las facturas	
2.3.33  Aprobación de los certificados	
2.3.34  Pago de los certificados	
2.3.35  Demora en los pagos
2.3.36  Fijación precios nuevos por modificación obra
2.3.37  Liquidación final	
2.3.38  Recepciones
2.3.39  Concepto
 
2.4       REGIMENES

2.4.1    De Contratación
2.4.2    Para modificaciones-agregados y supresiones	

                                                               GOBIERNO DE LA CIUDAD
                     DE BUENOS AIRES         
            
                                                               DIRECCIÓN GENERAL DE 
                                              MANTENIMIENTO Y TALLERES

OBRA: “Instalación del Sistema de detección de incendio” para el edificio de la Procuración General, Sito en la calle Uruguay 440/466

2              PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

2.1           DATOS DE LOS TRABAJOS

2.1.1.    OBJETO: La presente licitación tiene por objeto contratar la provisión y colocación del sistema de detección de incendios en la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires sita en Uruguay 440/466.-

2.1.2  	PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial para estos trabajos asciende a  la suma de Pesos Un millón cien mil ($ 1.100.000,00).-

2.1.3      REGIMEN DE CONTRATACION: Será por medio del sistema de Ajuste Alzado.-

2.1.4       PLAZO: Para la ejecución de los trabajos contratados, se fija un plazo total de  sesenta días (60) días hábiles contar desde la fecha de la orden de comienzo o, el día 15/12/2012 (lo que resulte primero). Se llama la atención respecto al art. 1.10.1 del PCG, en el sentido que deben preverse como normales los días de lluvia comprendidos en la media mensual. Si por cualquier circunstancia se demoraran los trabajos el Contratista arbitrará los medios para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales.

2.1.5 	TIPO DE OBRA: Se clasifica a ésta obra como de “Arquitectura”.-

2.1.6    	CAPACIDAD LEGAL: Los oferentes deberán acreditar capacidad legal para contratar conforme lo establecido en el art. 1.2.1 del P.C.G. Cuando se trate de una UTE, o cuando los firmantes no sean las personas que figuran en los estatutos que se acompañan a la oferta, deberá presentarse el Poder Especial que acredite tal representatividad.-

2.1.7	CAPACIDAD DE CONTRATACION (1.2.2.): El certificado de capacidad será el Anual que otorga el RNCOP, debidamente autenticado. La capacidad disponible será igual o superior a Pesos Un millón novecientos veinticinco mil ($ 1.925.000.-), en la sección Arquitectura o en Especialidad afín con los trabajos que se licitan.- 
    	Para detalles de cálculo y actualizaciones de esta capacidad según normas del RNCOP, ver art. 2.2.6.	

2.1.8      	PLAZO DE GARANTÍA: El plazo de garantía por todas las obras será de trescientos sesenta y cinco (365) días corridos. Durante este período el Contratista procederá a efectuar todas las reparaciones o subsanar los inconvenientes que surgieren por deficiencias, tanto del material como del trabajo.

2.1.9	PLANOS: Integra la documentación los planos Nº 5079-32 y 5079-33

Nota: Las cotas escritas prevalecen sobre las gráficas y los planos de detalles prevalecen sobre los planos generales.-

2.1.10    	PLANOS DE OBRA Y CONFORME A OBRA: Los planos de obra indicados en las Especificaciones Técnicas deberán ser ejecutados por el Contratista, quién deberá presentarlos a la inspección para su aprobación previo a la iniciación de los trabajos pertinentes.-
     	Junto con el pedido de recepción definitiva, el Contratista presentará los planos conforme a obra en tela transparente y con tres copias heliográficas. 
Los planos deberán presentarse en colores convencionales, suscritos por el Representante Técnico del Contratista, con aclaración de firma, nº de matrícula e indicación del Consejo Profesional otorgante.
Estas obligaciones constituyen una de las prestaciones del Contratista aún cuando estén diferidas hasta el período de garantía y su incumplimiento deja el contrato inconcluso, impidiendo la recepción definitiva y la liquidación final de la obra

2.1.11    	PLAN DE TRABAJO: Dado las características del establecimiento en que se ejecutarán las obras, estas se realizarán con la máxima intensidad. A tal efecto, el Contratista previo a la iniciación de los trabajos deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra, el plan de trabajos a ejecutar.      	
Se deberá proceder a la limpieza diaria del área de circulación que sean comunes, o sea los utilizados por la Empresa para su movimiento y los utilizados por el personal del edificio.
El incumplimiento del plan de trabajos hará pasible al Contratista de la aplicación de sanciones o multas.

2.1.12	CONSULTAS Y VISITAS LUGAR DE LA OBRA: Ante cualquier duda que se presentara con respecto a la interpretación de la documentación licitatoria para efectuar la oferta, el oferente podrá realizar cualquier consulta previa por escrito hasta cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha fijada para la apertura, en el domicilio que para la consulta y adquisición de los pliegos se indica en la publicación del llamado a licitación. De resultar procedente y dentro de las 48 hs de recibidas las mismas el GCBA emitirá la correspondiente circular con consulta para la notificación fehaciente de las firmas adquirentes de los pliegos licitatorios.-
       	Durante el período previo a la fecha de apertura de la licitación el GCBA. podrá formular aclaraciones respecto a la documentación licitatoria, las que serán comunicadas fehacientemente a los interesados mediante circulares sin consulta. 
Cabe mencionar que el oferente deberá visitar y conocer perfectamente el lugar donde se realizarán los trabajos con el fin de constatar las tareas a ejecutar.-

2.1.13    	OFICINA PARA LA INSPECCION (1.6.l5): El Contratista adaptará el local determinado según las especificaciones del PETP para utilizarlo como Oficina para la Inspección de Obra.-

2.1.14  OBRADOR: El Contratista adaptará el local determinado según las especificaciones del PETP para utilizarlo como obrador. El lugar indicado deberá ser mantenido por el Contratista en perfectas condiciones de higiene y seguridad.-

2.1.15	CARTEL DE OBRA (1.6.19): El Contratista colocará, proveerá y conservará en el edificio, un (1) cartel de obra de acuerdo con las indicaciones y normas del plano que se le entregará. El mismo estará iluminado.
Dicho cartel, en el cual también constará la fecha de finalización de la obra, se instalará con diez (10) días corridos de anticipación a la fecha de comienzo de los trabajos y se mantendrá como mínimo por igual período de días una vez terminados los mismos. 
Serán a cargo del Contratista las reparaciones motivadas por su retiro y su traslado hasta el lugar que indique el Gobierno de la Ciudad. 
El cartel se realizará en chapa de hierro D.D.B.W.G. Nº 24 sobre bastidor de madera de pino Paraná de 25mm x 50mm, con refuerzos especiales. En la parte anterior estará pintado con una mano de antióxido sintético al cromato de zinc, una mano de fondo sintético y tres manos de esmalte sintético brillante color blanco. Barras y tipografías azul.
En la parte posterior estará pintado con una mano de antióxido sintético al cromato de zinc, una mano de fondo sintético y cinco manos de esmalte sintético semimate, previo a la colocación sobre el bastidor de madera.
El cartel de obra se fijará a la fachada u otro lugar que indique la Inspección de Obra, mediante grapas especiales para clavar, de hierro cadmiado de sección cuadrada de 12,5mm x 12,5mm con largo adecuado de tal forma que asegure el correcto sostén del mismo. El cartel de Obra quedará en poder del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

2.1.16      ELEMENTOS EXISTENTES: En todos los casos en que, para llevar a cabo todos los trabajos previstos deba procederse al movimiento de muebles, útiles u otros elementos que se encuentren dentro del ambiente a tratar, ya sea cambiándolos de ubicación o trasladándolos a otro local, será esta tarea obligación de la empresa contratista, quien a la vez será responsable de adoptar las medidas necesarias para evitar que se produzcan daños en dichos elementos, tanto fijos como móviles.
Todos los elementos existentes indicados en los planos que se retiren, desamuren, o aparezcan como consecuencia de los trabajos contratados, quedan en propiedad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, siendo la Empresa Contratista la encargada de trasladarlos al lugar que indique la Inspección de Obra.-
Cuando ejecute tareas en áreas que por la distribución del inmueble en tratamiento, sea de imprescindible uso por parte del personal, el Contratista extremará al máximo las medidas de seguridad para evitar accidentes, protegiendo maquinarias, herramientas y materiales de modo tal que no queden al alcance de los mismos.-

2.1.17	ENERGIA ELÉCTRICA: Se permitirá el uso de la red existente en el edificio para los trabajos a desarrollarse durante la obra, o sea, que el consumo será absorbido por el GCBA, siendo responsabilidad del Contratista el preservar las instalaciones y elementos hasta su entrega con la recepción provisional, en la forma en que se encontrara.-

2.1.18	FOTOGRAFÍAS (1.16.2): El Contratista presentará antes de dar comienzo a los trabajos y luego mensualmente, hasta la finalización de las obras, fotografías color (3) copias de c/u de 12cm x 18cm en papel seda sin ribete con sus negativos y archivos digitalizados). Los motivos  y cantidad de las tomas serán indicados por la Inspección, dejándose constancia de la fecha en las copias.-

2.1.19      TELÉFONOS (1.16.1), VEHICULO (1.16.8): No se proveerán.-

2.1.20    	CUENTA EN BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES: El Contratista deberá abrir obligatoriamente una Cuenta Corriente o Caja de Ahorro en la casa Central o en cualquier sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de poder acreditar en la misma los pagos que le correspondan.-

2.1.21  	TERMINOLOGÍA (1.1.2): GCBA: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  MAyEP.: Ministerio de Ambiente y Espacio Publico u otro que la sustituya como jerarquía inmediata superior a la SSUEP; SSUEP Subsecretaría de Uso del Espacio Público u otra que la sustituya como jerarquía inmediata superior a la DGMYT; DGMYT: Dirección General de Mantenimiento y Talleres; DGTALPG: Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Procuración General; DGMAE: Dirección General Mantenimiento Edilicio; PCG: Pliego de Condiciones Generales aprobado por Decreto Nº 1254/08; PCP: Pliego de Condiciones Particulares; PET: Pliego de Especificaciones Técnicas; PETP: Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares; MEyOSP: Ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos; CAC: Cámara Argentina de la Construcción; RNCOP: Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas; INDEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos; DGEyC-MH-GCBA: Dirección General de Estadísticas y Censos del GCBA; POM: Pliego de Obras Menores; BOCBA: Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.-

2.2           DE LA LICITACIÓN

2.2.1	RECEPCIÓN Y APERTURA: Las ofertas se recibirán hasta la hora, la fecha y en el lugar que indique el llamado. De existir una postergación, ésta se publicará por los mismos medios y plazos que el llamado original.-

2.2.2       EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: La presentación de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptación de las Bases del llamado a licitación, no pudiendo alegar ninguna causa basada en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas.      

2.2.3        GARANTIAS 
    	a) de oferta (1.3.6): Reunirá los requisitos previstos en el art. 1.3.6 del P.C.G. Si se constituye la garantía con póliza de caución, esta tendrá cláusula de actualización trimestral. 
    	b) de adjudicación (1.4.4): También deberá realizarse de conformidad con la cláusula indicada en el punto precedente.

2.2.4	MANTENIMIENTO DE OFERTA (1.3.7): Los oferentes se obligan a mantener  sus ofertas por el plazo de ciento veinte  (120) días corridos a partir de la fecha de apertura. El  plazo de mantenimiento de las ofertas quedará prorrogado de pleno derecho, y en forma automática, pudiendo los oferentes retractarse por medio fehaciente en cualquier oportunidad después del vencimiento establecido en este artículo, con un mínimo de quince (15) días de antelación. -
       
2.2.5 	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO: A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que este Gobierno reviste condición de Exento. En consecuencia, en las ofertas no deberá discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este Impuesto, debiendo incluirse el mismo en el precio cotizado.-

2.2.6	CAPACIDAD DE CONTRATACION (1.2.2): La Capacidad de Contratación necesaria para esta obra que se indica en el Capítulo 2.1, surge de la aplicación de una de las siguientes fórmulas:

                a) Para obras de menos de 1 año de plazo:

                   Capacidad mínima requerida: PO + PO (12 - P.E.)
                                                                                        12

                 b) Para obras de 1 año o más plazo:

                   Capacidad mínima requerida: PO x 12
                                                                            PE

                PO: Monto del presupuesto oficial

                PE: Plazo de ejecución (en meses o fracción)

      	Al solo efecto de la admisión de ofertas, en función de la Capacidad de Contratación consignada en el Certificado  Anual que otorga el RNCOP, el presupuesto oficial se actualizará entre la “fecha de cálculo” y la de actualización del Certificado de Capacidad, utilizando los índices del INDEC-Costo de la Construcción Nivel General.
       	El certificado deberá ser luego, actualizado a la fecha de la firma del contrato, calculándose la Capacidad necesaria con el monto de la oferta aceptada.

2.2.7	FORMA DE PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN: Las propuestas deberán ser presentadas en original, en idioma castellano, firmadas y selladas en cada una de sus hojas por el oferente y el Profesional responsable. El Pliego de Licitación y las Circulares deberán ser incluidos.
      	El oferente formulará su propuesta indicando el cómputo propio; precios unitarios y/o globales según corresponda y los montos totales, con los cuales propone realizar cada uno de todos los ítems de las obras.
     	Cuando exista discordancia en la consignación de un mismo precio, siempre se dará prioridad al precio escrito en letras.
No se considerarán las propuestas que presenten enmiendas, entrelíneas, raspaduras o errores o alguna otra que haga a la esencia del contrato y que no hubieran sido debidamente salvadas al pié de aquellas.
      	Asimismo será causal de rechazo, la inclusión por parte del oferente de condicionamientos a su oferta que, a criterio del GCBA puedan afectar los aspectos técnicos y/o económicos de la misma.-
La documentación indicada en el art. 1.3.5 del PCG, y la requerida en el presente PCP, deberá ser presentada en un único sobre.-
       
2.2.8        FORMULA DE PROPUESTA: Será la siguiente:
  	“El que suscribe .............., con domicilio legal constituido  en ...................., Capital Federal, C.P........., Teléfono................., ratifica el conocimiento pleno y aceptación de los trabajos de .................................., y de la respectiva documentación que sirve de base al  llamado a  licitación  Nro........, inclusive las aclaraciones emitidas, con un presupuesto oficial que asciende a ..................y ofrece ejecutar los mismos en la suma de............................. ($ ..................).-
  
                Buenos Aires,...........de.............de................-           

2.2.9	REDETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS: A todos los efectos, resultan de aplicación las disposiciones de la Ley 2809, el Decreto Nº 1312-GCBA-2008, reglamentario de la misma y la Resolución Nº 4271-MHGC-2008, que establece la Metodología correspondiente.-
Conforme lo previsto en el Art. 9º de la Ley 2809, el oferente deberá acompañar con su propuesta la siguiente documentación:
a) El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes, precios unitarios y   su incidencia en el precio total.  
            b) Los análisis de precio de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus componentes, incluidos las cargas sociales y tributarias.
            c) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios, de conformidad con lo establecido en el art. 5º de la Ley 2809
La falta de presentación de alguno de los elementos señalados precedentemente, implicará la inmediata descalificación de la oferta.-
 
2.2.10	ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN: Conforme lo establecido en el art. 7° del Anexo Decreto Nº 1312-GCBA-2008, la estructura de ponderación de los insumos principales correspondiente a esta obra es la siguiente:

COMPONENTE	Incidencia       %	DESCRIPCION DE LA FUENTE DE INFORMACION A EMPLEAR	
Nº	DESIGNACION			
1	Mano de obra	36	Índice Evolución del Costo Salarial de la Actividad de la Construcción en la Ciudad de Bs. As.-DGEyC-MH-GCBA	
2	Inst. Sanitaria e Incendio	31	ICC INDEC - Cuadro 1.5-Ítem Instalación sanitaria y contra incendio - Dto. 1295-PEN-2002, Art. 15, Inc. r)	
3	Equipamientos Varios	15	SIPM-IPIB-INDEC - Cuadro 3.2 Posición 31-Máquinas y aparatos eléctricos - Dto. 1295-PEN-2002, Art. 15°, Inc. i)	
4	Inst. Eléctrica	8	ICC INDEC - Cuadro 1.5-Ítem Instalación eléctrica - Dto. 1295-PEN-2002, Art. 15°, Inc. g)	
5	Gastos generales	7	ICC INDEC - Cuadro 1.4-Capítulo Gastos generales - Dto. 1295-PEN-2002, Art. 15, Inc. p)	
6	Costo Financiero	3	Tasa Nominal Anual Activa del BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Dto. 1295-PEN-2002, Art. 15°, Inc. o) 	
 	 	100	 	

2.2.11 	AMPLIACION DE LA INFORMACIÓN: El GCBA podrá requerir la ampliación de la información suministrada o cualquier otra que sea necesaria para el mejor estudio de los antecedentes dentro del plazo que se señala, siempre y cuando ello no implique una alteración de la oferta original ni una modificación de la propuesta económica del oferente.-
   	Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado precedentemente, el GCBA podrá  considerar que existe una retracción tácita del proponente y en consecuencia desestimar su propuesta y disponer la pérdida del depósito de garantía de la oferta.
	El GCBA se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la información suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha información, se desestimará la propuesta y dispondrá la pérdida automática de la garantía de oferta.
 	El personal que determine el GCBA, podrá visitar las oficinas, depósitos, equipos, obras realizadas etc., que los oferentes declaren en su propuesta a efectos de comprobar en el lugar, su capacidad para la ejecución de la obra.-

2.2.12 	REQUISITOS DE LA OFERTA (1.3.5): Todos los requisitos establecidos en el art. 1.3.5 del PCG, son considerados absolutamente inexcusables y su ausencia o incumplimiento total o parcial, dará lugar al rechazo de la propuesta.-

2.2.13	DECLARACION DE OBRAS (1.3.5): Indicar montos y mes básico. La certificación de ente contratante es optativa en la oferta, pero la DGMYT podrá solicitarla luego, de considerarlo necesario.-

2.2.14  	EQUIPO (1.3.5): El oferente deberá consignar el equipo a utilizar en obra, debiendo constar cantidad de unidades, año de fabricación, si es propiedad de la empresa, de subcontratistas o a comprar en caso de ser adjudicataria.-

2.2.15      LIQUIDEZ DEL ACTIVO Y EXIGIBILIDAD DEL PASIVO(1.3.5)
	A la fecha de licitación (o al último mes anterior al de apertura), deberán presentarse los índices económicos financieros, con indicación de los valores constituidos de los mismos: 
       
	Indices Financieros (en valores absolutos)
       
                1. Liquidez: Activo corriente
                                    Pasivo corriente

	2. Endeudamiento: Deudas + Previsiones          
                                                Patrim. Neto + Ganan. a realiz.

	 3. Solvencia: Patrimonio Neto 
                                       Deudas + Previsiones              

                Indices Económicos

	4. Inmovilizaciones: Patrim. Neto + Ganan. a realiz.
	    (En val. abs.)	   Activo no corriente

	5. Rentabilidad (%): Utilidad Neta x 100
                                                  Patrim. Neto

2.2.16   	PLAN DE TRABAJOS (1.3.5): Con la oferta se presentará un diagrama de barras indicativo del ordenamiento de las tareas en el tiempo, que podrán estar agrupadas por rubro, afinidad o ejecución simultánea. Se establecerá la ejecución en períodos quincenales, utilizando los cómputos y precios de la oferta.
El Plan de Trabajos presentado no tendrá carácter de definitivo y a indicación del GCBA podrá ser reajustado después de la firma del contrato, cuidando que se mantenga la línea esencial de la estructura técnico-económica de la propuesta.-
	Si el Plan de Trabajos presentado por el oferente no responde de manera racional y acorde con un normal desarrollo de la obra el GCBA podrá a su exclusivo juicio exigir una modificación, otorgando un plazo preciso para el mismo. Si en su nueva presentación existieran idénticos defectos se procederá a la desestimación de la oferta.-

2.2.17     	PLAN DE INVERSIONES (1.3.5): En el mismo Plan del art. anterior o aparte, se fijará el importe de certificación mensual en forma acumulativa y parcial. En lo posible y de acuerdo con las características del trabajo, se mantendrá la certificación dentro de una función lineal inversión-tiempo.-

2.2.18	GARANTIAS PARA IMPUGNACIONES: Las impugnaciones que efectúen los interesados respecto al informe de preselección o a la preadjudicación, deberán estar avaladas  con una garantía constituida por una póliza de seguro de caución conforme previsiones del Decreto Nº 1013-GCBA-2008. 
     	Es condición de admisibilidad de las impugnaciones la previa constitución de la garantía correspondiente.- 

2.2.19   	REPRESENTANTE TECNICO Y REPRESENTANTE EN OBRA (1.3.5): Para el profesional o técnico responsable cuya presentación hará el oferente con la documentación de la propuesta, a que se refiere el art. 1.3.5 del PCG, se exigirá que el mismo cuente con título habilitante inscripto en el Consejo Profesional correspondiente, que posea su matrícula al día y con suficientes antecedentes como para asegurar la normal marcha de los trabajos.-

2.2.20	CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR AFIP: Por aplicación de la Resolución General Nº 1814/AFIP/05 (BO. Nº 30.569 del 13-01-05), en las contrataciones y/o licitaciones cuyo monto supere los $ 50.000,00 (Pesos Cincuenta Mil), las empresas presentarán junto con su propuesta el “Certificado Fiscal para Contratar” o la constancia de solicitud del mismo. Sin el cumplimiento de este requisito la oferta no será tenida en cuenta.

2.2.21	CERTIFICADO DEL REGISTRO DE DEUDORES/AS ALIMENTARIOS/AS MOROSOS/AS: Conforme los términos de la Ley Nº 269 (B.O.C.B.A.) N° 852, de fecha 05/01/00) y su modificatoria Ley N° 510 (B.O.C.B.A. N° 1073 de fecha 20/11/00), deberá acompañarse el Certificado o la solicitud del que resulte que el oferente, concursante o postor en el caso de las personas físicas o que los directores o miembros del Organismo de Administración, en el caso de las Sociedades, no se encuentran inscriptos en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as, dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sin el cumplimiento de este requisito, la oferta no será tenida en cuenta.

2.2.22    AYUDA MEMORIA: Para ordenar la propuesta, resumiendo los requisitos que figuran en el PCG y las aclaraciones o modificaciones del PCG.

Nº  Designación y observaciones						Ver artículos

1 Garantía: No se admite pagaré:				1.3.5/6  2.2.3

2 Certificado de Capacidad: el Anual del RNCOP; actualizar al mes de licitación y certificar por escribano					         1.2.2-2.1.7-1.3.5-2.2.6
       	
3 Domicilio: nota diciendo constituimos domicilio legal en Capital Federal, Código Postal y Teléfono:								1.2.3   1.3.5

4 Copia pliego:					1.3.5 

5 Declaración de obras: Con montos y fechas de básico			1.3.5  2.2.13

6 Antecedentes del personal:					1.3.5

7 Balances: tres (3) últimos ejercicios; firma de contador y Consejo Profesional de Ciencias Económicas									1.3.5  

8 Indices: calculados a fecha licitación o mes anterior; firma de contador y Consejo Profesional de Ciencias Económicas					1.3.5  2.2.15
              
9 Equipos:				1.3.5  2.2.14

10 Informes bancarios y comerciales:					1.3.5

11 Representante Técnico: designar profesional matriculado		1.3.5  2.2.19

12 Acreditación representación o personería de los firmantes de la oferta:		1.3.5

13 Contrato social y estatutos: 					1.3.5

14 Declaración de conocimiento del lugar y condiciones de la obra:		1.3.5

15  Declaración de mantenimiento de oferta:				1.3.5   2.2.4

16 Declaración de que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente acepta la Jurisdicción de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Bs. As., renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción: 		1.3.5

17 Pliego de Bases y Condiciones:							2.2.7
	
18 Otros documentos: si los pide el PCP: 						1.3.5

19 Oferta: según formula con IVA incluido, cómputo y presupuesto propio	2.2.5-1.3.5-2.1.11-2.2.16

20 Plan de trabajos y curva de inversiones:					1.3.5  2.2.17

21 Presupuesto desagregado por ítem:					2.2.9

22 Análisis de Precios de cada ítem:							2.2.9
             
23 Certificado  Fiscal Para Contratar AFIP o constancia de solicitud del mismo:	2.2.21

24 Certificado  del Registro de deudores/as alimentarios/as  morosos/as o constancia de solicitud del mismo:									2.2.22

2.2.23     	EMPRESAS ASOCIADAS: Las empresas asociadas, deberán presentar convenio de constitución autenticado y cumplir individualmente con los requisitos 5, 6, 7, 9, 12 y 13................................s/art. 1.3.5.
                
2.2.24     	ADJUDICACION (1.4.3): La adjudicación se efectuará en la  forma prevista en los art. 1.4.2 y 1.4.3 del PCG, basándose en el análisis de la oferta más conveniente.
     	Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo fijado perderá la garantía de oferta, y el GCBA podrá proceder a la adjudicación de las obras al oferente que le sigue en el orden de conveniencia de las ofertas, o a efectuar un nuevo llamado.
Si el GCBA no firmara el contrato antes de los sesenta (60) días de notificada la adjudicación, por causas no imputables al adjudicatario, vencido el término éste podrá solicitar que la adjudicación quede sin efecto, en cuyo caso se le devolverá la garantía de oferta sin que ello importe el reconocimiento de indemnización alguna.- 
La autoridad competente resolverá la adjudicación, previo dictamen de la Procuración General de la Ciudad de Buenos aires (Art. 7 inc. d) Dto. 1510-GCBA-97 y Art. 10 inc. a) de la Ley Nº 1218 (B.O.C.B.A. Nº 1850 del 05-01-04), modificado por el art. 141 de la Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2557 del 02-11-06).-

2.2.25    	DECISION DE DEJAR SIN EFECTO LA LICITACION. FACULTADES DE LA ADMINISTRACION: El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se reserva el  derecho de dejar sin efecto la licitación en todo o en parte o de rechazar la totalidad de las ofertas presentadas con anterioridad al perfeccionamiento del contrato, sin que ello genere u otorgue a favor de los proponentes derecho a reclamo o indemnización.-

2.2.26	COPIAS DE OFERTA: El adjudicatario presentará tres (3) juegos completos de su oferta.-

2.2.27	FIRMA DEL CONTRATO Y CONTRATA: Será de aplicación lo dispuesto en el art. 1.5 del PCG.-

2.2.28   	DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO: Los documentos que conforman el contrato son los que se indican en el art. 1.5.3 y 1.5.4 del PCG, que quedan complementados con lo siguiente: 	   	
       	l) La contrata y sus anexos, si los tuviera.
       	2) La resolución del GCBA, estableciendo las condiciones bajo las cuales se adjudica la obra.
       	3) Pliego de Bases y Condiciones Generales, particulares, y de Especificaciones  Técnicas y las circulares emitidas con motivo del llamado.
       	4) La oferta del adjudicatario, sus aclaraciones y modificaciones.
     	Todos los documentos que integran el contrato deberán ser considerados  recíprocamente explicativos, pero en caso de existir ambigüedades o discrepancias, ellas serán aclaradas y resueltas por el GCBA.

2.3	     DE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA

2.3.l      	ORDEN DE COMIENZO (1.6.1): La orden de comienzo de los trabajos se impartirá dentro de los cinco (5) días de la fecha de la firma del contrato, fecha que coincidirá con el inicio real de las tareas, quedando documentado en Acta de inicio de obra.
     	Si a los diez (10) días de la fecha fijada, el Contratista no hubiera iniciado realmente los trabajos, el GCBA podrá resolver el contrato por culpa del Contratista, el que en dicho caso perderá la garantía de adjudicación y responderá por los daños y perjuicios consiguientes.-
      
2.3.2 	PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES DEFINITIVO: Dentro de los cinco (5) días de la firma del contrato, el Contratista está obligado a presentar el Plan de Trabajos e Inversiones definitivo. Dicho plan será aprobado o rechazado dentro de los cinco (5) días siguientes por la Inspección de Obra. En caso de ser rechazado, el Contratista deberá proceder al ajuste del mismo de acuerdo con las observaciones que efectúe la Inspección de Obra sin alterar el plazo y el importe total. La Inspección de Obra determinará el plazo para su nueva presentación.-

2.3.3	INSPECCION DE OBRA: El art. 1.6.23 del PCG queda complementado de la siguiente manera: “La supervisión técnica de los trabajos corresponde al GCBA, realizando la inspección y controles pertinentes a través de un profesional o técnico de la DGMyT: Dirección General Mantenimiento y Talleres, expresamente designado.-       

2.3.4	REPRESENTANTE TECNICO (1.6.22): El profesional o técnico propuesto según art. 2.2.19 será responsable de los términos que establezca la documentación contractual, y de la perfecta ejecución de los trabajos en lo que a la firma se refiere.
      	Será además el encargado de suministrar todos los datos que estén establecidos en el PCP y todos aquellos que le sean requeridos para la mejor marcha de las tareas. Deberá concurrir a diario a los lugares en que se realicen trabajos, así como a todos los actos de replanteo y mediciones para la certificación, los cuales se considerarán implícitamente aceptados por el Contratista si el Profesional responsable no concurriere.-
	En ausencia del Representante Técnico, quedará siempre en obra un técnico capacitado para reemplazarlo en las mismas funciones que le competen, de su mismo nivel, de forma tal que no se resienta la marcha de la obra. En ningún caso dicho sustituto podrá observar órdenes impartidas por la Inspección de Obra.
 
2.3.5	REPLANTEO DE LAS OBRAS: El replanteo de los trabajos será hecho por el Contratista en la fecha fijada por la Inspección de Obra, verificado y aprobado por la misma. La demora en la ejecución del mismo o su inexistencia hará aplicable las mismas consecuencias establecidas en el art. 1.6.6 del PCG y no dará derecho al Contratista a prorrogar el plazo de obra.-
           	No podrán comenzarse las obras en ningún sector que no haya sido previamente replanteado. El replanteo se efectuará en forma conjunta con el Inspector de Obra.-

2.3.6	EQUIPOS A UTILIZAR POR EL CONTRATISTA: La conformidad que dé el GCBA al equipo que proponga el Contratista en su oferta o a sus modificaciones no implica responsabilidad alguna para el GCBA si debe ser aumentado, modificado o cambiado, total o parcialmente, antes o durante los trabajos para cumplir con el plan de obras previsto y aprobado, porque se entiende que una de las condiciones básicas del contrato es el cumplimiento del mismo dentro del plazo de ejecución programado.-

2.3.7     	ELEMENTOS EXISTENTES: Si por el tipo de trabajos que se licitan, hay elementos existentes que se retiran, desarman o aparecen durante la ejecución, los mismos son y quedan en propiedad del GCBA, debiendo el Contratista entregarlos en el lugar de la Capital Federal que se le indique. Se exceptúan  los cascotes y tierra, que pasan a poder del Contratista, quién podrá utilizarlos en la obra o proceder a su retiro.

2.3.8 	RETIRO DE MATERIALES, MAQUINAS E IMPLEMENTOS DE TRABAJO: El Contratista no podrá retirar materiales, máquinas e implementos de trabajo que hubieran ingresado a la obra o hubieran sido elaborados en la misma, sin una autorización expresa de la inspección, cualquiera fuera el destino de esos elementos o materiales. Queda establecido que todos los equipos y materiales que ingresen a la obra estarán afectados exclusivamente a las necesidades de la misma.-

2.3.9	MATERIALES (1.8.1): Los materiales a proveer responderán a las normas IRAM, salvo que por razones especiales de orden técnico o notoria escasez en plaza ello no fuera posible, a juicio de la Inspección.
      	Todos los materiales a emplear deberán ser aprobados previamente por la Inspección. Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados, son imputables al Contratista. Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de veinticuatro (24) horas de notificado. Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la Inspección podrá hacer retirar los materiales rechazados y serán por cuenta del Contratista los gastos que se originen, no responsabilizándose el GCBA por pérdidas sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista, previa notificación del lugar de depósito.-

2.3.10	TRABAJOS EN HORAS EXTRAS (1.7.2): Cuando el Contratista decida trabajar en horas extras, la DGMYT designará los agentes para el control de las tareas. La liquidación se hará de acuerdo con las normas vigentes para personal del Gobierno de la Ciudad, y se considerará que las erogaciones por este concepto están incluidas en las obligaciones del Contratista.-

2.3.11	ENERGIA ELECTRICA: Todos los gastos que demandare su conexión nueva, si fuera necesario, o su uso, serán por cuenta del Contratista. En edificios existentes (salvo que se indique una conexión nueva), se utilizará la red e instalaciones existentes para las tareas normales de la obra, a juicio de la DGMYT, y el consumo será absorbido por el GCBA.-
      	El Contratista será responsable de preservar los elementos e instalaciones y entregarlos junto con la Recepción Provisional en la forma en que los encontró.-

2.3.12	AGUA DE CONSTRUCCION: Será por cuenta del Contratista la gestión y pago de derechos que correspondiere según el trabajo y las normas de Aguas Argentinas. El GCBA podrá exigir la exhibición de comprobantes del cumplimiento de esta obligación.-

2.3.13	ESPECIFICACIONES TECNICAS TIPO: La DGMYT dispone de un Pliego de Especificaciones Técnicas Tipo que abarcan la mayoría de los rubros principales de la construcción.
    	En consecuencia el PET contiene las especificaciones técnicas de la obra que se licita, entendiéndose que para lo no previsto en estas últimas, regirán las normas del Pliego Técnico Tipo.-

2.3.14	CONEXIONES, DESCONEXIONES Y TRASLADOS: Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones y rehabilitación de cualquier instalación provisoria o definitiva, las que deberán ser gestionadas por el Contratista, con la debida anticipación, corriendo por cuenta de la misma, los gastos, trámites, derechos, etc, que éstos eventos demanden.
      	No se procederá a efectuar la recepción provisoria de las obras, hasta tanto el contratista no presente la aprobación final de las instalaciones por las respectivas empresas.-

2.3.15	SUBCONTRATACIONES: Será de aplicación lo dispuesto en el art. 1.9 del PCG.-

2.3.16	NOTIFICACIONES: Todas las notificaciones se efectuarán por Ordenes de Servicio según art. 1.6.24 del P.C.G. En forma supletoria y en casos específicos, se efectuará por medio de las notificaciones que establece el Decreto N° 1510-GCBA-97, conforme los plazos y formas de las vías recursivas que en el mismo se establecen.

2.3.17	PERSONAL OBRERO (1.7.1): El Contratista deberá mantener al día el pago del personal que emplee en la obra y dará estricto cumplimiento a las disposiciones sobre legislación del trabajo existente.-
      	El Contratista será el único responsable por el pago de los salarios y cargas sociales de los obreros que hubieren trabajado en la obra sin excepción alguna, respondiendo además, por los daños y perjuicios en los casos de posibles reclamaciones judiciales o extrajudiciales que produjere tal incumplimiento, no teniendo el GCBA responsabilidad alguna por los hechos, actos u omisiones del Contratista.
   	El Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra al personal que de él depende, como así también del incumplimiento de las obligaciones que establece la Ley 24.557, quedando el GCBA liberado de toda responsabilidad referida a las situaciones descriptas anteriormente.- 
Queda entendido que el contratista asume cualquier obligación que surja de las modificaciones en las relaciones laborales con sus dependientes durante el término del contrato, desligando al GCBA de toda responsabilidad y/o intervención en todas las cuestiones que, al respecto, pudieran ocurrir.-

2.3.18	LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIOS (1.6.24): Tendrán hojas numeradas por triplicado. En este libro se redactarán las Órdenes de Servicios impartidas por la Inspección de Obra, que serán firmadas por el  Inspector de Obra y por el Profesional responsable de la Empresa, como constancia de haber tomado conocimiento.-

2.3.19	LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO (1.6.25): Tendrán hojas numeradas por triplicado. En este libro la Empresa Contratista asentará los pedidos de aprobación de las distintas etapas de la obra, otras observaciones que desee efectuar o pedidos de aclaración y todo lo indicado en el art. 1.6.25 del PCG.
      	El Representante Técnico de la Empresa firmará las notas de pedido emitidas, y el Inspector procederá a su aceptación o rechazo, indicando las causas del mismo, firmando al pié.

2.3.20	SEGUROS: El Contratista deberá contratar los seguros que se indican en el art. 1.16.5 del PCG y los que se indican a continuación: a) Por robo y hurto: debe comprender la totalidad de las instalaciones y elementos afectados al servicio, b) Por responsabilidad civil: Que cubrirá la responsabilidad civil contra cualquier daño, perdida o lesión que pueda causar a terceros o a cualquier persona o bienes de la Ciudad a causa de la ejecución del presente contrato y c) De la Inspección de Obra: deberá contratar un seguro personal para proteger al personal del GCBA afectado a la Inspección de los trabajos.
      	Todos los seguros serán contratados por el término del plazo de la obra y sus prórrogas, con una aseguradora autorizada, e incluirá al GCBA como cotitular y/o beneficiario según corresponda.-

2.3.21	PERJUICIOS POR INCENDIOS: El Contratista deberá extremar las mediadas de precaución para evitar incendios en las obras durante los períodos de ejecución y de conservación, debiendo a tal fin disponer de los elementos apropiados, según la naturaleza de las obras o trabajos.-

2.33.22	INDEMNIZACION POR CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR: El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdida o perjuicios ocasionados por su propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le sean imputables.
Cuando esas pérdidas, averías o perjuicios provengan de culpa de los empleados de la administración, o de fuerza mayor o caso fortuito, serán soportados por la administración pública.
Para los efectos de la aplicación del párrafo anterior se considerarán casos fortuitos o de fuerza mayor:
a)Los que tengan causa directa en actos de la administración pública, no previstos en los pliegos de licitación;
b)Los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de características tales que impidan al contratista la adopción de las medidas necesarias para prevenir sus efectos.
Para tener derecho a las indemnizaciones a que se refiere este artículo, el contratista deberá hacer la reclamación correspondiente dentro de los plazos y en las condiciones que determinen los pliegos especiales de cada obra.
En caso que proceda la indemnización, se pagará el perjuicio de acuerdo, en cuanto ello sea posible, con los precios del contrato (Artículo 39 de la Ley de Obras Públicas).
La reclamación correspondiente, deberá ser presentada por escrito por el contratista dentro de los tres (3) días de ocurrido el hecho, acompañando todos los elementos mediante los cuales sustenta el mismo.-

2.3.23	OBLIGACIONES CON CARGO AL CONTRATISTA: Si el Contratista no diere cumplimiento a alguna de las obligaciones que le asigna la documentación contractual la DGMYT  podrá realizarla de oficio con cargo al Contratista, adicionándole al costo el quince por ciento (15%) por gastos de administración.-

2.3.24	PRORROGAS (1.6.21): Las ampliaciones de plazo que se otorguen implicarán la prolongación por igual período de la totalidad de las obligaciones del Contratista.
      	El Contratista acepta que la concesión de una ampliación de plazo por cualquier causa, no implicará reconocimiento de la existencia de gasto improductivo alguno, salvo que así lo estipule taxativamente el decreto o resolución de aprobación del nuevo plazo.-

2.3.25	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO EN TÉRMINO (1.11.4): Para demora en el cumplimiento de los plazos parciales o totales, se aplicarán multas diarias según lo siguiente:

a) Para demoras de hasta un quinto (1/5) del plazo:
M= 0, 15 x C/P               
 b) Para demoras siguientes hasta dos quintos (2/5) del plazo:
M= 0, 35 x C/P
                 Siendo:
        	M: Multa diaria
       	C: Monto del contrato más ajustes, a la fecha de aplicación de la penalidad
      	P: Plazo original más prórrogas aprobadas

    	Las multas indicadas precedentemente, acumuladas, implicarían un diez por ciento (10%) del contrato. Por lo tanto, a partir de las mismas regirán las previsiones del  art. 1.11.4 del PCG.
      	Cuando existan recepciones parciales, los valores C y P serán: 
       	C: Monto de la obra a recepcionar 
       	P: Plazo parcial
   	Cumplidas las recepciones parciales, el plazo a considerar será el original total más las prórrogas.-

2.3.26	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE ORDENES DE SERVICIOS (1.11.4): En caso de incumplimiento de las Ordenes de Servicios impartidas por la Inspección de Obra, se procederá a la aplicación de una multa diaria por mora en el cumplimiento de esas órdenes igual a una dos mil ava parte (1/2000) del monto del contrato, incluidas las ampliaciones. Igual penalidad diaria se aplicará cuando el avance de obra fuera menor en un veinte por ciento (20%) o más de lo aprobado según el Plan de Trabajo e Inversiones.-

2.3.27	Medición de las obras: Las obras ejecutadas de conformidad, se medirán mensualmente para confeccionar el certificado de obra que estipula el art. 1.12.1 del PCG, con ajuste a las normas para medición de estructuras en la construcción de edificios del ex MEyOSP.
      	Dentro de los últimos tres (3) días de cada mes se medirán los trabajos ejecutados por el Contratista, en conjunto con la Inspección de Obra. A los fines de la medición se entenderá por trabajos ejecutados a aquellos cuyos elementos constitutivos se hallen colocados en la obra en el lugar y la forma que ocuparán definitivamente de acuerdo a lo estipulado en los planos y en la documentación contractual. Los elementos sueltos o materiales únicamente pueden ser certificados por sistema de acopio en caso de estar expresamente previsto para la presente obra.-

2.3.28	CERTIFICADOS DE OBRA (1.12.1): Conformada la medición por la Inspección de Obra y el Contratista, este preparará de acuerdo a sus resultados el certificado mensual de avance de obra, según formulario aprobado por la DGMYT, en el que se liquidarán los trabajos de acuerdo al cómputo y presupuesto de la oferta aprobada. 
      	Cada certificado mensual de avance de obra deberá ser acumulativo, es decir que comprenderá la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la última medición y su valor parcial estará dado por su excedente sobre el total del certificado anterior.
      	Aún en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el certificado se deberá confeccionar con el criterio sustentado por la Inspección de Obra, haciéndose posteriormente, si correspondiere, la rectificación pertinente o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las   diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.
      	Los certificados constituirán en todos los casos documentos provisionales para el pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la medición y liquidación final y ésta sea aprobada por el GCBA.-
  	El certificado contendrá las planillas de medición correspondientes y la planilla sumatoria del volumen de obra realizado en cada ítem, avalada por la Inspección de Obra y por el Representante Técnico de la Empresa.-
      	Los certificados serán confeccionados por el Contratista en original y tres (3) copias y serán presentados ante la DGMYT para su conformación y su posterior tramitación.-
   
2.3.29       REGIMEN DE ACOPIO: 

2.3.29.1    GENERALIDADES
     Se podrán acopiar los materiales y elementos a incorporar a la obra, no debiendo superar el mismo el veinticinco por ciento (25%) del valor del monto de la oferta presentada por el Contratista.
     El Contratista deberá presentar el plan de acopios ajustado a las necesidades que surja del plan de trabajos e inversiones, debiendo detallar en el mismo las cantidades, precios unitarios y monto total resultante de su plan.
El material acopiado nunca podrá exceder de las cantidades necesarias para la obra, admitiéndose solamente una tolerancia del cinco por ciento (5%) en más de lo previsto. Asimismo, y con referencia a los precios unitarios no podrán exceder los indicados en el presupuesto de oferta del contratista para cada uno de los materiales. 

2.3.29.2   LUGAR DE ACOPIO
     El acopio deberá efectuarse indefectiblemente en la propia Obra. Como excepción y cuando las circunstancias lo requieran o hagan imprescindible por las características del material u otro motivo justificado, se podrá autorizar el mismo en otro lugar que apruebe la Inspección de Obra. A tales efectos se tendrá en consideración, entre otras razones, cuestiones de seguridad y mejor conservación de los elementos y materiales, y si se trata de materia prima que debe pasar por taller para su elaboración en forma previa a la colocación en la obra. 
     Los materiales y elementos depositados dentro o fuera del obrador, serán de propiedad del Gobierno, quedando el contratista constituido en depositario de los mismos, con las obligaciones, responsabilidades y penalidades emergentes del Código Civil (art. 2202 al 2219). 
     Si se constatara pérdida o deterioro del material y elementos acopiados, la Inspección de Obra ordenará al contratista su inmediata reposición.

2.3.29.3   CERTIFICADO DE ACOPIO 
La liquidación del certificado de acopio se efectuará hasta un ochenta por ciento (80%) del  monto total de los materiales acopiados. 
		
2.3.29.4    GARANTIAS ESPECIALES
                 El Contratista constituirá una garantía especial por el monto de lo acopiado, la cual se podrá constituir mediante la constitución de póliza de un seguro de caución cuyo beneficiario será el Gobierno. Dicha garantía será devuelta al momento del desacopio de la totalidad del material.

2.3.29.5 ACTA Y PRESENTACION DE CERTIFICADOS DE ACOPIO Y DESACOPIO
En todos los casos, sea que el acopio se efectúe en el taller, depósito u obrador, se labrará un acta, donde se constatarán los materiales y elementos acopiados y sus cantidades, la que será firmada por el Representante Técnico del Contratista y el Inspector de Obra.
Junto al certificado de acopio se presentará la siguiente documentación:
1) Plan de acopios presentado por el Contratista y aprobado por el Gobierno.
2) Acta de acopio.
3) Garantías del acopio.
Para el cálculo del desacopio, en cada certificado de obra se deducirá el porcentaje resultante de dividir el monto aprobado del acopio sobre el total de la oferta presentada por la Contratista, por cien (100), siendo su resultado el porcentaje de desacopio a aplicar a cada certificado a los efectos de calcular el descuento en tal concepto. De tal modo que el monto a pagar por cada certificado de obra es el que corresponde por el avance de la misma, deducido el porcentaje de desacopio que será proporcional a dicho avance de obra certificado.

2.3.30	Retención sobre los certificados (1.12.2): De cada certificado de obra se retendrá de su valor total bruto un cinco por ciento (5%) para constituir el denominado fondo de reparo, el que quedará en poder del GCBA hasta la oportunidad prevista en el art. 1.12.2 del PCG, en garantía de la correcta ejecución de los trabajos y para hacer frente a eventuales reparaciones que fueren necesarias y que el Contratista no ejecutare cuando le fuere ordenado.-

2.3.31	Sustitución del fondo de garantía y reparo: Las retenciones sobre los certificados a que se refiere  el art. 1.12.2 del PCG podrán ser sustituidas mediante póliza de seguro de caución que contenga las cláusulas aprobadas por el GCBA. El monto de la póliza podrá ser hasta el ochenta por ciento (80%) de la suma a retener.- 

2.3.32      PRESENTACION DE LAS FACTURAS
Las facturas deberán ser confeccionadas conformes los términos establecidos por la Dirección General Impositiva  y presentadas en la Dirección General de Contaduría General:
a) Copia del Certificado de Obra con el sello de recepción del área especificada en el pliego de condiciones de la obra o del área que la jurisdicción determine y número de actuación  por el cual tramita.
b) Fotocopia autenticada del comprobante de pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos del último vencimiento operado al momento de presentar la factura.
c) Fotocopia autenticada de la declaración jurada de cargas sociales (formulario 931) correspondiente al mes anterior al momento de presentación de la factura y constancia de su pago.
d) Otra documentación que exija el pliego o la normativa aplicable.
No se aceptarán facturas que no estén acompañadas de la totalidad de la documentación mencionada precedentemente

2.3.33	Aprobación de los certificados: Se fija un plazo de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de presentación de los certificados de obra, a efectos de que la DGMYT les preste su conformidad.
  	Si el certificado fuere observado la cuenta del plazo comenzará a regir en el momento en que el Contratista lo presente corregido.
      	El certificado conformado será elevado por la DGMYT a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público, para su aprobación y posterior giro a la Dirección General de Contaduría, dentro de los cinco (5) días hábiles de la conformidad prestada por la DGMYT.-

2.3.34	Pago de los certificados (1.12.6): El pago se efectuará dentro de los treinta (30) días hábiles contados desde la conformidad del PRD.

2.3.35	Demora en los pagos: Si el GCBA se demorase en el pago de los certificados aprobados, el Contratista tendrá derecho a reclamar los intereses que resulten de la aplicación de la tasa pasiva del Banco de la Ciudad de Buenos Aires para operaciones de plazo fijo a treinta (30) días.-
      	Cuando corresponda el pago de intereses, los mismos se determinarán sobre la suma neta a pagar al Contratista, de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidación del certificado, y previa deducción de las sumas que se retengan con arreglo a las cláusulas contractuales.-

2.3.36	FIJACION DE PRECIOS NUEVOS POR MODIFICACION DE OBRA (1.13.2): Cuando correspondiere la fijación de precios nuevos por modificaciones de obra según art. l.l3.l del PCG, los mismos serán calculados mediante análisis sobre la base del precio de adquisición por mayor de los materiales que se requieran, del desperdicio y de la mano de obra. Los precios serán a valores vigentes a la fecha de licitación.
      	En casos particulares (por ejemplo cuando por el tiempo transcurrido desde la licitación o cuando por razones técnicas no es posible obtener los precios básicos), también se podrán calcular a la fecha en que se convenga, debiéndose dejar la debida constancia en el documento de aprobación.
      	Los precios nuevos se determinarán de la siguiente forma:
       
       	Análisis de precio:
       	a) Materiales....................................	$
       	b) Jornales........................................	$
       	c) Cargas Sociales % de b................    $_________         
       	d) Mano de Obra b + c.....................	$
       	e) Costo directo a + d.......................	$
       	f) Gastos Generales 15% de e...........	$
       	g) Subtotal e + f................................	$
       	h) Gastos financieros % de g.............	$
       	i) Beneficio % de g............................   $
       	j) Subtotal g + h + y..........................	$        
       	k) Impuesto Ingresos Brutos % de j...	$
       	l) PRECIO j + k.................................	$
       	m) IVA % de l...................................	$_________
      	 n) PRECIO A Cons. Final l + m........ $_________
        
     	Mano de obra: Los jornales y beneficios a tener en cuenta serán los vigentes en el mes indicado como básico. Para las cargas sociales y el seguro se considerará la planilla publicada por la Cámara Argentina de la Construcción. La DGMYT podrá exigir los comprobantes que acrediten el cumplimiento de las cargas sociales.-

2.3.37	LIQUIDACION FINAL: Luego de la recepción provisional y antes de la definitiva, el Contratista preparará una liquidación final. Constarán en la misma los montos de los trabajos, incluso adicionales y deductivos, u otros conceptos si los hubiere, determinando el monto total a que ascendieron los trabajos ejecutados. Se indicará además los datos principales de la obra; decretos, resoluciones o disposiciones de aprobación, fechas de terminación, recepciones, prórrogas, reajustes y su aprobación, etc. La liquidación final será conformada por la DGTALPG.

2.3.38	RECEPCIONES: Las Actas provisionales y definitivas serán suscritas por la Comisión que la DGTALPG designe. 

2.3.39	CONCEPTO: Luego de la recepción definitiva se enviará al RNCOP, el concepto que haya merecido el Contratista. Asimismo, se cursará dicha información cada vez que dicho organismo lo solicite durante la marcha de la obra.-

2.4           REGIMENES:
  
2.4.1	REGIMEN DE CONTRATACION: Será por medio del sistema de “ajuste alzado”. Ello significa que:
                 a)	Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos necesarios   hasta su completa terminación y funcionamiento, aunque no estén especificados en la documentación del contrato.
    
      	b)	El presupuesto oficial debe considerarse a título ilustrativo.
   
       	c)	El Contratista está obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los lugares donde serán ejecutados y proveerá el total de los materiales y la mano de obra, incluso todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de acuerdo a las indicaciones y los fines que señala la documentación.
	
d)	Entiéndese que el oferente realizó su propio estudio y en consecuencia, los trabajos indicados en los planos, planillas, pliegos de condiciones y otras piezas contractuales que no figuren indicados en las partes o rubros del presupuesto oficial, se considerarán incluidos dentro del monto total contratado y deberán ser ejecutados por el Contratista como incluidos en su oferta.

       	e)	Si a juicio exclusivo de la DGMYT existiera algún error de significación en el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el monto de dicho error se prorrateará entre todos los rubros del presupuesto manteniéndose invariable el monto de la oferta y modificándose consecuentemente el plan de trabajos e inversiones. Dicha operación podrá realizarse en cualquier momento, aún durante la ejecución de la obra.

    	f)	No se reconocerá diferencia entre la cantidad ejecutada en obra y la consignada en el presupuesto oficial o en el presupuesto de la oferta aceptada, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente autorizadas.-

2.4.2        MODIFICACIONES-AGREGADOS Y SUPRECIONES  (LEY 13064)
    	Para determinar el mayor o menor gasto que debe ser regularizado como consecuencia de modificaciones, ampliaciones, trabajos imprevistos o supresiones de obra, el estudio se practicará en todos los casos, respetando las condiciones previstas en la documentación licitatoria para formular la oferta, es decir, a precios básicos para homogeneizar las condiciones. Se pueden presentar dos casos:

A) Cuando las alteraciones del proyecto, estudiadas a precios básicos, no superen el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, el Contratista deberá aceptar que las mismas se liquiden y paguen por el mismo régimen previsto en el contrato.

B) Si por el contrario las alteraciones superaran el veinte por ciento (20%) del  monto total del contrato le cabe al contratista el derecho de rescisión del contrato (art. 50). En el caso que el Contratista no optare por ese derecho, ambas partes contratantes deberán solicitar la fijación de nuevos precios de los ítems afectados, con ajuste a las normas del apartado A (interpretación Art. 30, 37, 38 y 53). 
En particular para la situación prevista en el caso A) se pueden presentar las siguientes variantes:

I) El exceso  ordenado  para  un  ítem supera el veinte por ciento (20%) del  metraje corregido sobre planos:

    a) Precios unitarios oficiales: Se aplicará a la cantidad de trabajo que se ordene en demasía, o  sea la que supere el metraje corregido, un nuevo precio a convenir. El resto se liquidará conforme a las previsiones del Presupuesto oficial, afectado del coeficiente de aumento o rebaja contractual (aplicación del art. 38).                         
       	El nuevo precio se retrotraerá a las condiciones básicas de licitación, y para los análisis se adoptarán los gastos generales  y beneficios que se hallan prefijados.
                
b) Precios unitarios calculados por el Contratista y aceptados por la DGMYT: Se  aplicará a la cantidad de trabajo que se ordene en demasía, o sea la que supere el metraje corregido, un nuevo precio corregido. El nuevo precio corregido debe partir del análisis que determine el precio fijado por el Contratista, a cuyo fin se solicitara, o en caso contrario, se construirá sobre la base del precio unitario cotizado.
El nuevo precio significa la corrección del análisis, modificando aquellos elementos que hacen el costo del ítem que se prueba fehacientemente que ha sufrido alteraciones para más o para menos, fundadas en las modificaciones del metraje, vale decir que en la corrección solo se considera la real interferencia de la alteración ordenada. 
    
    II)  El exceso ordenado para un ítem no supera el veinte por ciento (20%) del metraje corregido sobre planos:

a)Precios unitarios oficiales: Se liquidará el metraje del Presupuesto Oficial, incrementado del exceso que se ordena construir todo al precio del Presupuesto Oficial, afectado del coeficiente de aumento o rebaja contractual, (aplicación del art. 30 Ley 13.064).
b) Precios unitarios calculados por el contratista  y aceptados por la  DGMYT: Ídem, ídem punto a) pero todo al precio cotizado por el contratista, revisado y aceptado.

      III)	La disminución ordenada para un  ítem  supera  el veinte por ciento (20%) del metraje corregido sobre planos:
             
a) Precios unitarios oficiales: Además de corregirse el metraje, deberá corregirse el precio unitario  del contrato y deducir toda la partida con metraje real a ejecutar, con precio nuevo a convenir (aplicación  de los art. 37 y 38).
El nuevo precio se retrotraerá a las condiciones básicas de la licitación y para los análisis se adoptarán los gastos generales y beneficios fijados.

b)Precios unitarios calculados por el contratista  y aceptados por la DGMYT: Se deduce todo el ítem con el precio unitario del contratista, revisado y aceptado por la DGMYT pero con el metraje corregido y se liquida el metraje real a ejecutar a precio corregido o sea modificando del análisis contractual aquellos elementos que hacen el costo del ítem y que se prueba fehacientemente que han sufrido alteraciones para más o para menos, fundadas en las modificaciones del metraje, vale decir que en la corrección solo se considera la real interferencia de la alteración ordenada.
 
IV) La disminución ordenada para un ítem no supera el veinte por ciento (20%) del metraje corregido sobre planos

a)Precios unitarios oficiales: Se liquidará  el metraje del Presupuesto Oficial disminuido del metraje suprimido y con precio del Presupuesto Oficial, afectado del coeficiente de aumento o de rebaja contractual (aplicación del art. 30 Ley 13.064).
  
b) Precios unitarios calculados por  el Contratista  y aceptados  por la DGMYT Ídem, ídem punto a) pero todo al precio cotizado por el Contratista, revisado y aceptado.
                
V) Supresión del ítem:

a) Precios unitarios oficiales: Es el caso  del apartado III llevado al límite. Procede en consecuencia suprimir la partida con metraje corregido a nuevo precio. El nuevo precio se retrotraerá a las condiciones básicas de la licitación y para los análisis se adoptarán los gastos generales y beneficios que se hallan prefijados.-
                
b) Precios unitarios calculados por el Contratista y aceptados por la DGMYT:
Procede suprimir la partida aplicando al precio del Contratista revisado y aceptado por la DGMYT el metraje corregido.-

    	Junto con la presentación de cada reajuste por las modificaciones  que se le encomienden, el Contratista deberá presentar una planilla resumen de todos los reajustes anteriores. Los reajustes serán a valores básicos a efectos de verificar su relación con la escala que establece el art. 9 inc b) de la Ley de Obras Públicas 13.064.
         
Alteración de la naturaleza del ítem: Pueden presentarse dos alternativas:

a) La alteración implica una modificación sustancial de  la estructura con la intervención de nuevos  materiales, gremios y técnicas distintas.
 	En tal caso es menester anular el ítem previsto, conforme al apartado V) precedente y agregar la nueva estructura a nuevos precios, partiendo de        otros trabajos análogos o semejantes.
	Cuando no exista el nuevo precio retrotraído a la fecha de licitación, el precio actualizado y básico será establecido mediante un análisis en el que se incluirá como máximo el recargo fijado para gastos generales y beneficios.

b) La alteración consiste en el cambio de la naturaleza de alguno de los elementos componentes de la estructura. 
Para determinar el nuevo precio del ítem bastará introducir el mayor o menor gasto, por comparación de los cambios.

	Falta de acuerdo: Aún en el caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista deberá proceder inmediatamente a la ejecución de los trabajos, dejando a salvo sus derechos, siempre que no sea de aplicación la rescisión. En este caso se llevará cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la aprobación o reparos de la DGMYT, servirá como elemento ilustrativo para fijar luego el precio en instancia administrativa o judicial.
      	A este último efecto las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos generales y beneficios ya establecidos.
    
    	Ejecución por un tercero o por administración: Sin perjuicio de lo estipulado precedentemente, la DGMYT podrá disponer que los trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato.